Odtworzenie retencji korytowej - Remont zastawki w km 0+137 rzeki Garbarnia w obrębie m. Leszno Górne, gmina Szprotawa
	Budowa :	Nadzór Wodny Szprotawa

	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
	 
	1		AW  AW1	  1,00	kpl
			Montaż tymczasowej grodzy w korycie rzeki Garbarnia w celu przekierowania wody do kanału		
			obiegowego - kalkulacja własna , wraz z demontażem		

	2		KNR 2-01  201I0223020000	  18,00	m3
			Kanał obiegowy: dł. 12,0 m gł. 1,0 m; nachylenie skarp 1:1,0; szer. w dnie 0,5m - ANALOGIA do:		
			wykopy rowów i kanałów melioracyjnych, wykopy przy regulacji rzek o obj.na 1 m do 1,5 m3		
			wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kat.III		

	3		AW  AW2	  1,00	kpl
			Montaż grodzy tymczasowej od strony rzeki Bóbr - kalkulacja własna, wraz z demontażem		

	4		KNR 4-04  404I0306060000	  3,20	m3
			Rozbicie brył oddzielnych żelbetowych		

	5		KNR 4-04  404I0301030000	  6,00	m3
			Rozebranie umocnień ponuru i poszuru zastawk - analogia jak podłoża z betonu żwirowego o grubości do		
			15 cm		

	6		KNR 4-04  404I1103040000	  9,20	m3
			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport		
			samochodem samowyładowczym na odległość 1 km		

	7		KNR 4-04  404I1103050000	  9,20	m3
			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające		
			na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km		

	8		KNR 2-01  201I0230010000	  18,00	m3
			Zasypywanie kanału obiegowego. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III		

	 
	2		ROBOTY MONTAŻOWE		
	 
	9		KNR 2-01  201I0215040000	  20,00	m3
			Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III		

	10		KNNR  1 0603-01	  60,00	r-g
			Pompowanie wody z wykopu		

	11		KNR  210-0106-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  6,50	m
			Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań, na głębokość: do 3 m - w gruncie		
			kat.III		

	12		KNR  2-10 0109-02	  1,56	m3
			Zestawienie pomocnicze dla tablic 0106-0108. Objętość ścianek szczelnych drewnianych z bali o długości		
			3 m i grubości 80 mm		

	                      Remont zastawki rz. Garbarnia w km 0+137 
	2.  ROBOTY MONTAŻOWE

	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	13		KNR  2-11 0522-05	  12,00	m
			Palisady ze słupków drewnianych o średnicy 12-14 cm wbijanych na głębokość 1,5 m w grunt kat.III		

	14		KNR  2-11 0212-05	  10,00	kg
			Zbrojenie konstrukcji betonowych-małe budowle wodne (mnichy,zastawki,przyczółki		
			przepustozastawek).Średnica zbrojenia do 8 mm, stal gładka		

	15		KNR  2-11 0212-05	  250,00	kg
			Zbrojenie konstrukcji betonowych-małe budowle wodne (mnichy,zastawki,przyczółki		
			przepustozastawek).Średnica zbrojenia do 8 mm, stal żebrowana		

	16		KNR  2-11 0212-06	  150,00	kg
			Zbrojenie konstrukcji betonowych-małe budowle wodne (mnichy,zastawki,przyczółki		
			przepustozastawek).Średnica zbrojenia 10-14 mm		

	17		KNR  2-11 0208-01	  0,90	m3
			Elementy betonowe o objętości budowli do 1,0 m3 - beton wyrównawczy C8/10		

	18		KNR  2-11 0208-04	  5,16	m3
			Elementy żelbetowe o objętości budowli 1,01-10,0 m3 - konstrukcja wypadu i płyty dennej beton klasy		
			C20/25 ; W-8; M200		

	19		KNR  2-11 0208-04	  6,48	m3
			Elementy żelbetowe o objętości budowli 1,01-10,0 m3 - konstrukcja przyczółków i ściany wypadu beton		
			klasy C20/25 ; W-8; M200		

	20		KNR  2-11 0208-04	  0,19	m3
			Elementy żelbetowe o objętości budowli 1,01-10,0 m3 - konstrukcja kładki beton klasy C20/25		

	21		KNR  2-11 0304-04	  1,35	m2
			Wykonanie i założenie szandorów z bali o grubości 71 mm po ostruganiu		

	22		KNR  2-11 0304-09	  2,00	szt
			Okucia dla szandorów ponad 71 mm		

	23		KNR 2-01  201I0502020000	  12,00	m3
			Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 m.		
			Grunt kategorii III		

	24		KNR 2-01  201I0507020000	  80,00	m2
			Plantowanie skarp, dna rowów przy robotach wodno-inżynieryjnych. Grunt kategorii III		

	25		KNR  2-11 0413-01	  12,60	m3
			Budowle siatkowo-kamienne,kosze z siatki stalowej wym. oczek 60x80 mm grubość gabionu 0,17 m, na		
			podsypce piaskowej i geowłókninie		

	26		KNR  2-11 0505-01	  40,00	m
			Opaski wielokiszkowe o średnicy 3x20 cm.Wykonanie z brzegu		

	                      Remont zastawki rz. Garbarnia w km 0+137 
	2.  ROBOTY MONTAŻOWE

	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	27		AW  AW4	  1,00	kpl
			Wykonanie i montaż poręczy z rur stalowych. Długość poręczy 6,0 m, wys. 1,1 m - kalkulacja własna		

	 
	---  Koniec  wydruku  ---